ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                   TB.10
Số: 1174 /UBND - CN                      Quy Nhơn, ngày  09 tháng   5   năm  2005
V/v những vướng mắc trong quá trình thực hiện bàn giao lưới điện trung áp nông thôn do địa phương đầu tư sau ngày 28/02/1999

	
                                          Kính gửi:  - Bộ Tài chính
                                                           - Bộ Công nghiệp  

 	Thực hiện chủ trương bàn giao lưới điện trung áp nông thôn do địa phương đầu tư sau ngày 28/02/1999 của Bộ Công nghiệp, tính đến ngày 01/4/2005, Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn của tỉnh đã thẩm định, bàn giao cho Điện lực Bình Định tiếp nhận, quản lý 81/143 công trình, hiện đang tiếp tục xem xét thẩm định 24 công trình đã có đủ hồ sơ, còn lại 38 công trình các địa phương (huyện, xã) chưa tổng hợp được quyết toán, hiện đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc nên không thể hoàn thành công tác bàn giao lưới điện trung áp nông thôn trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/3/2005 như Bộ Công nghiệp đã quy định.

	Nguyên nhân chủ yếu đối với các công trình chưa tổng hợp được quyết toán do hồ sơ cơ bản không đầy đủ, chứng từ ban đầu không rõ ràng. Sở dĩ có trường hợp trên là do các địa phương thường xuyên thay đổi cán bộ trực tiếp theo dõi, quản lý công trình; một số công trình không có cơ sở để đối chiếu, tổng hợp các nguồn vốn theo quy định, nhất là vốn huy động đóng góp của nhân dân, vốn hỗ trợ, hiến, tặng của các cơ quan, đoàn thể; nhiều công trình không xác định được cơ quan nào là chủ đầu tư hoặc ban quản lý công trình… Nhằm giải quyết các tồn tại nêu trên, sớm hoàn thành công tác bàn giao lưới điện trung áp nông thôn trên địa bàn theo quy định, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp xem xét cho ý kiến chỉ đạo xử lý theo hướng:

	1- Đối với các công trình lưới điện trung áp nông thôn xây dựng từ ngày 28/02/1999 đến ngày 09/5/2003, nếu chủ đầu tư không tổng hợp được báo cáo quyết toán công trình thì việc xác định giá trị tài sản lưới điện trung áp nông thôn được tính theo giá trị thực tế với đơn giá như đã quy định tại Quyết định số 84/1999/QĐ-BCN ngày 16/11/1999 của Bộ Công nghiệp.
	
	2- Nếu cho phép áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 84/1999/QĐ-BCN ngày 16/11/1999 của Bộ Công nghiệp thì đề nghị cho gia hạn thời gian bàn giao, tiếp nhận lưới điện trung áp nông thôn kéo dài đến hết ngày 30/6/2005 để UBND tỉnh có thời gian chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.

	3- Đối với các công trình đã được kiểm kê sau ngày 09/5/2003 và các công trình mới thi công từ năm 2004 trở lại đây thì việc bàn giao và xác định giá trị hạch toán tài sản bàn giao căn cứ vào hồ sơ quyết toán công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt, hoặc căn cứ vào khối lượng thực hiện được ban quản lý công trình và đơn vị thi công thống nhất nghiệm thu, cơ quan tiếp nhận hạch toán tạm thời giá trị tài sản bàn giao trên sổ sách, khi được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình, cơ quan tiếp nhận sẽ điều chỉnh lại giá trị tài sản theo quyết toán được duyệt. Quy định trên nhằm giảm bớt thời gian tổ chức thẩm định giá trị tài sản lưới điện trung áp nông thôn.
 	
	Trên đây là những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chủ trương bàn lưới điện trung áp nông thôn do địa phương đầu tư sau ngày 28/02/1999 và một số ý kiến đề xuất có liên quan. Kính đề nghị các Bộ Tài chính, Công nghiệp quan tâm xem xét và sớm cho ý kiến chỉ đạo để UBND tỉnh Bình Định có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện./.

		                                              TM- UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Nơi nhận:                                                                                   KT-CHỦ TỊCH
- Như trên                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Công ty Điện lực 3
- Sở Tài chính
- Sở Công nghiệp                                      
- Điện lực Bình Định
- Lưu VP, K6.                                                                      	 
 
                                                                                     Trịnh Hồng Anh