ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                   TB. 15
Số:  1657 /UB - CN                           Quy Nhơn, ngày  08  tháng  7   năm  2004
V/v đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình Nhà máy Cồn-Rượu 

                               
                                         Kính gửi:  - Sở Công nghiệp
                                                          - Sở Xây dựng
                                                          - Sở Tài nguyên và Môi trường
                                                          - Công ty TNHH Rượu Bình Định
                                                          - Công ty Cổ phần đường Bình Định
                                                          - DNTN  Dệt may Thương mại Vạn Phát

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình Nhà máy Cồn- Rượu, phấn đấu đưa nhà máy nêu trên đi vào hoạt động với thời hạn sớm nhất, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chủ đầu tư (Công ty TNHH Rượu Bình Định) đôn đốc các cơ quan tư vấn sớm hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật- dự toán các hạng mục liên quan để phục vụ thi công theo quy định và thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra các đơn vị thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khẩn trương hoàn thành các công việc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt và tiến độ thi công đã cam kết, nhất là các hạng mục chính như nhà sản xuất, khu xử lý nước thải tập trung, hệ thống kè, mương thoát nước, điện động lực, các bồn chứa nguyên liệu cần chú ý ưu tiên tập trung lực lượng, bố trí thêm máy móc thiết bị kể cả tăng ca vào ban đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình nêu trên nhằm bảo đảm việc hoàn thành, bàn giao và đưa nhà máy đi vào hoạt động trong tháng 8/2004. 

 Các cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định kịp thời hồ sơ thiết kế kỹ thuật-dự toán các hạng mục công trình của Nhà máy Cồn- Rượu và bàn giao hồ sơ lại cho chủ đầu tư với thời hạn nhanh nhất nhằm đảm bảo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng công trình theo quy định. 

2. Đồng ý về chủ trương cho mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Cồn-Rượu Bình Định theo hướng sử dụng toàn bộ thiết bị của cơ sở sản xuất cồn Vạn Phát tại KCN Phú Tài. Giao Hội đồng quản trị Công ty TNHH Rượu Bình Định chỉ đạo lập dự án đầu tư mở rộng nhà máy, bổ sung vốn góp giữa các thành viên, đề xuất việc thành lập hội đồng để xác định giá trị tài sản liên doanh (thiết bị sản xuất cồn của DNTN Vạn Phát) và các nội dung công việc có liên quan đến việc mở rộng nhà máy, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định hiện hành.

Riêng việc xin thêm đất mở rộng nhà máy, trên cơ sở dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Cồn- Rượu giai đoạn 2 được cấp thẩm quyền phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục giải quyết phần diện tích đất mở rộng, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt theo quy định hiện hành. 

Yêu cầu Công ty TNHH Rượu và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

                                                              KT-CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH    
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên
- CT và PCT Nguyễn Văn Thiện
- Đ/C Phạm Bá
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- UBND huyện Tây Sơn
- CVP, PVP BQHồng
- Lưu VP, K6, K2.

                                                                                           Trịnh Hồng Anh