ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
                                                               KQ.14
Số:  263 /QĐ- CTUB                              Quy Nhơn, ngày  27  tháng   01   năm 2004

QUYẾT  ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu 
và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu xây lắp
Dự án: Khôi phục và nâng cấp hệ thống đê Đông tỉnh Bình Định 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
	- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
	- Căn cứ Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;
	- Căn cứ Quyết định số 3296/QĐ-CTUB ngày 19/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế và dự toán công trình Khôi phục và nâng cấp hệ thống đê Đông tỉnh Bình Định;
	- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 557/ TTTĐ-KHĐT ngày 13/12/2004;

QUYẾT ĐỊNH

	Điều 1: Phê duyệt nội dung Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu xây lắp công trình Khôi phục và nâng cấp hệ thống đê Đông tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

	I- Kế hoạch đấu thầu:
1- Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp của công trình nêu trên với quy mô xây dựng đã được xác định tại Quyết định số 3296/QĐ-CTUB ngày 19/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh được phân chia thành 08 (tám) gói thầu, gồm:
+ Gói thầu số 1: Khối lượng xây lắp đê Nhơn Phú (đoạn K0 ữ S12), 02 (hai) cống tròn S9 và A33 (thuộc Tiểu dự án I);
+ Gói thầu số 2: Khối lượng xây lắp đê Nhơn Phú (đoạn K12 ữ KC), cống Yừn, cống tròn tại S15 + 10 và đường thi công (thuộc Tiểu dự án I);
+ Gói thầu số 3: Khối lượng xây lắp đê Nhơn Bình (đoạn T4 ữ A25) (thuộc Tiểu dự án II);
+ Gói thầu số 4: Khối lượng xây lắp đê Nhơn Bình (đoạn A25 ữ KC), cống tròn tại A42 (thuộc Tiểu dự án II);
+ Gói thầu số 5: Khối lượng xây lắp đoạn đê 1 từ K0 ữ tràn Phước Thắng, cống Hà Gạch, đường thi công tuyến qua tràn Tân Giảng và tràn Hà Gạch (thuộc Tiểu dự án III);
+ Gói thầu số 6: Khối lượng xây lắp đoạn đê 2 từ tràn Phước Thắng ữ cống Đồng Cói, cống hồ tôm Lạc Điền, đường thi công tuyến Bạn Cùng ữ Phước Thắng (thuộc Tiểu dự án III);
+ Gói thầu số 7: Khối lượng xây lắp đoạn đê 3 từ cống Đồng Cói ữ cống Lão Đông, cống hồ tôm Đồng Cói (thuộc Tiểu dự án III);
+ Gói thầu số 8: Khối lượng xây lắp đoạn đê 4 từ cống Đồng Cói ữ tràn Bà Lễ, cống tiêu Gò Trụ, đường thi công tuyến TL640 ữ cống Lão Đông, cầu qua cống Lão Đông và cống Kiến Thiết (thuộc Tiểu dự án III).

2- Giá gói thầu, nguồn tài chính, điều kiện thanh toán:
a) Giá gói thầu (không bao gồm thuế giá trị gia tăng), tính giảm 3% so giá trị dự toán được duyệt: 
    + Gói thầu số 1: 2.223.600.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng).
    + Gói thầu số 2: 1.997.900.000 đồng (Một tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng).
    + Gói thầu số 3: 2.355.400.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm năm mưoi lăm triệu, bốn trăm ngàn  đồng).
    + Gói thầu số 4: 2.318.400.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm mười tám triệu, bốn trăm ngàn  đồng).
    + Gói thầu số 5: 1.784.500.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm tám mưoi bốn triệu, năm trăm ngàn  đồng).
    + Gói thầu số 6: 2.553.900.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm năm mưoi ba triệu, chín trăm ngàn  đồng).
    + Gói thầu số 7: 2.851.100.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm năm mưoi mốt triệu, một trăm ngàn  đồng).
    + Gói thầu số 8: 3.096.900.000 đồng (Ba tỷ, không trăm chín mưoi sáu triệu, chín trăm ngàn  đồng).
b) Nguồn tài chính: Vốn nước ngoài tài trợ (của UNDP, Chính phủ Hà Lan và Chính phủ Luxembourg) và vốn đối ứng của tỉnh. 
c) Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán khối lượng hoàn thành của gói thầu nêu trên theo kế hoạch vốn phân bổ cho công trình hàng năm và chủ đầu tư sẽ không chịu bất kỳ lãi suất nào trong thời gian thanh toán chậm.
3- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi cho 08 (tám) gói thầu. 
4- Phương thức đấu thầu: Mỗi gói thầu là một túi hồ sơ.
5- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho mỗi gói thầu.
6- Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước ngày 30/11/2005 cho 08 gói thầu.
7- Thời gian tổ chức đấu thầu: Trước ngày 05/01/2005.
II- Hồ sơ mời thầu: Thống nhất theo nội dung hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu xây lắp 08 gói thầu nêu trên kèm theo Tờ trình số 2124/TT-SNN ngày 26/11/2004 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.
	
          Điều 2: Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu nêu trên theo quy định nêu tại Điều 1 Quyết định này và theo đúng Quy chế đấu thầu.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

                                                                           KT- CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- BQL dự án GRRTT BĐ
- Lưu VP + K10