ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                   TB. 11
Số:  2723 /UB - CN                           Quy Nhơn, ngày  19   tháng   10   năm 2004
V/v giải quyết các vướng mắc về bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Nhơn Bình 

	

                                Kính gửi: - Sở Tài chính
                                                - Sở Kế hoạch và Đầu tư
                                                - Ban Giải phóng mặt bằng TP Quy Nhơn
                                                - UBND thành phố Quy Nhơn
                                                - Công ty CP dịch vụ phát triển hạ tầng PBC

 	Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Nhơn Bình, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

	1. UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng thành phố Quy Nhơn khẩn trương xem xét, bố trí 18 lô đất tái định cư tại khu Đông Võ Thị Sáu cho 08 hộ gia đình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1775/QĐ-CTUB ngày 24/6/2004 nhưng hiện còn đang ở trong mặt bằng khu A của cụm công nghiệp Nhơn Bình, nhằm sớm di dời các hộ nêu trên ra khỏi cụm công nghiệp để chủ đầu tư hoàn thành việc san lấp mặt bằng và giao đất cho các doanh nghiệp theo đúng tiến độ quy định. Lưu ý, quá trình bố trí tái định cư cho các hộ nêu trên cần quan tâm xem xét giải quyết các trường hợp thật sự có nhu cầu xin bố trí đất liền kề, nhưng mỗi hộ tối đa không quá hai lô liền kề để phần nào đáp ứng theo nguyện vọng của nhân dân. 

	2. Để có mặt bằng di dời số mồ mả hiện còn trong cụm công nghiệp Nhơn Bình, trước mắt Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển hạ tầng PBC tự ứng trước kinh phí và phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn tiến hành chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất cho các tổ chức, cá nhân liên quan tại khu cải táng mới Trường úc, kể cả khoản kinh phí ũi đường lên khu cải táng theo quy định hiện hành. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phê duyệt để hoàn trả lại số kinh phí mà Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển hạ tầng PBC đã tạm ứng chi trước nêu trên trong năm 2005. 

	3. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Nhơn Bình tổ chức vận động, hướng dẫn các hộ gia đình nằm trong diện di dời sớm nhận đất tái định cư và giao trả mặt bằng theo đúng thời gian quy định.
							
Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển hạ tầng PBC và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

                                                                            KT-CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Nơi nhận:                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
- Như trên
- CT UBND tỉnh
- UBND phường Nhơn Bình
- PVP Bùi Quốc Hồng
- Lưu VP, K6, K7.                                                                      	                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	                                                                                                                                                    
                                                                               Trịnh Hồng Anh