ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                - TB.5 
Số:   724 /UB - TM                        Quy Nhơn, ngày  02   tháng  04  năm  2004
V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình khu xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài giai đoạn I, II, III	

                                            Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư                                               
                                                  - Công ty Phát triển hạ tầng các KCN 

Xét đề nghị của Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tại Tờ trình số 135/TT-PTHT ngày 22/3/2004 và Đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 75/TT-TĐ ngày 24/3/2004 về việc thẩm định và trình duyệt kế hoạch đấu thầu công trình khu xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng khu xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài giai đoạn I, II, III với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Về phân chia các gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị  của công trình khu xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài giai đoạn I, II, III được chia thành 07 gói thầu cụ thể như sau: 

 - Gói thầu số 1: Đường ống và hố gom nước thải trung tâm.
 - Gói thầu số 2: Các đường ống nhánh thu gom nước thải
 - Gói thầu số 3: Các hồ sinh học
 - Gói thầu số 4: Đường ống dẫn xả nước thải 
 - Gói thầu số 5: Khối lượng xây lắp và thiết bị khu xử lý chính
 - Gói thầu số 6: Hệ thống cấp điện khu xử lý chính
 - Gói thầu số 7: San nền, nhà điều hành, nhà kho, tường rào, cổng ngõ.

2. Gía các gói thầu: Là giá trị theo dự toán xây lắp và thiết bị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Nguồn tài chính: Vốn ngân sách và vốn vay

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Toàn bộ các gói thầu đều đấu thầu rộng rãi.  

5. Phương thức đấu thầu: Mỗi gói thầu là một túi hồ sơ. 

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho mỗi gói thầu.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
 - Gói thầu số 1:  60 ngày
 - Các gói thầu từ số 2 đến số 4:  90 ngày
 - Gói thầu số 5:  240 ngày
 - Gói thầu số 6:  60 ngày
 - Gói thầu số 7:  120 ngày

7. Thời gian lần lượt tổ chức đấu thầu các gói thầu nêu trên từ tháng 4 đến tháng 6/2004.

Chủ đầu tư (Công ty Phát triển hạ tầng các KCN) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đấu thầu công trình theo đúng nội dung của các gói thầu đã được phân chia nêu trên và các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Yêu cầu Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

                                                                  CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
                                                                                          
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên 
- BQL các KCN 
- Lưu VP, K6.

 

                                                                                      Vũ Hoàng Hà