ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   92 /QĐ- CTUB                      Quy Nhơn,  ngày  17   tháng  01  năm  2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán 
                               Hạng mục: Sửa chữa đê Nam Bảo An
Công trình :  Khắc phục lũ lụt đê Đông năm 2003

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/0003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; 
	- Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-CTUB ngày 26/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục sửa chữa đê Nam Bảo An thuộc công trình khắc phục lũ lụt đê Đông năm 2003;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 18/TT-SNN ngày 06/01/2005;

QUYẾT ĐỊNH

	Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế – dự toán công trình, với các nội dung sau:
1- Tên công trình:	 Khắc phục lũ lụt đê Đông năm 2003
     Hạng mục : Sửa chữa đê Nam Bảo An
2- Địa điểm XD: 	Xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước
3- Chủ đầu tư:	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
4- Nội dung điều chỉnh, bổ sung:  
    - Bổ sung 03 cống lấy nước qua đê, gồm 02 cống phía bờ tả tại vị trí S3+20m, S6-20m và 01 cống phía bờ hữu tại vị trí S 6. Hình thức cống tròn đường kính 30 cm; kết cấu cống bằng các ống buy bê tông M200 đúc sẵn.
     - Đoạn đê tiếp giáp với cống lấy nước: không thi công.
	5- Dự toán điều chỉnh, bổ sung:	 	- 20.213.000 đồng
	                   (Giảm: hai mươi triệu, hai trăm mười ba ngàn  đồng)
          Trong đó: + Phát sinh giảm:     30.460.000 đồng
                           + Phát sinh tăng:	    10.247.000 đồng
	6- Nguồn vốn thực hiện: Vốn khắc phục lụt bão năm 2003
	7- Tổ chức thực hiện: Giao đơn vị trúng thầu tiếp tục thi công phần điều chỉnh, bổ sung nêu trên.
	Điều 2: Quyết định này làm cơ sở để lập kế hoạch vốn và cấp phát vốn. Khi thanh quyết toán công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

	Điều 3: Quyết định này bổ sung Quyết định số 1140/QĐ-CTUB ngày 26/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.
	Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                          		                      KT.CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
  Nơi nhận :					                  PHÓ CHỦ TỊCH
- Như điều 3 ;
- Chi cục PCLB và QLĐĐ				
- Lưu VP, K10 					

								  Nguyễn Văn Thiện