ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                  - 
Số: 1867/UBND - CN                     Quy Nhơn, ngày  29   tháng   7   năm  2005
V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục hệ thống thoát nước khu tái định cư (giai đoạn 2, 3)  phường Bùi Thị Xuân	

                                                Kính gửi:  - Sở Kế hoạch và Đầu tư                                               
                                                       - Ban Giải phóng mặt bằng và Xây 
                                                          dựng khu tái định cư các KCN 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 267/TT-TĐ ngày 26/7/2005 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục hệ thống thoát nước công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (giai đoạn 2, 3 ) phường Bùi Thị Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục hệ thống thoát nước thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (giai đoạn 2, 3 ) phường Bùi Thị Xuân với các nội dung chủ yếu như sau:

1- Phân chia các gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp được duyệt của hạng mục công trình nêu trên được phân chia làm 03 gói thầu:

- Gói thầu số 01: Tuyến thoát nước MX2 – Gb dọc đường nội bộ ĐS 10 (gồm tuyến thoát nước chính, các tuyến ngang thu nước về tuyến chính) và các tuyến đấu nối về hố ga hiện trạng và ga sinh hoạt.

- Gói thầu số 02: Tuyến thoát nước MX1- Ga dọc tuyến đường nội bộ ĐS 12 (gồm tuyến thoát nước chính và các tuyến ngang thu nước về tuyến chính, trừ hố ga G20 thuộc gói thầu số 01).

- Gói thầu số 03: Hệ thống thoát nước giai đoạn 3.

2- Giá gói thầu:
 
- Gói thầu số 01:  1.929.000.000đ (Một tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu đồng).
 
- Gói thầu số 02:  1.862.000.000đ (Một tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu đồng).
- Gói thầu số 03:  1.529.000.000đ (Một tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu đồng).

3- Nguồn tài chính: Theo quyết định số 1518/QĐ-CTUBND ngày 22/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4- Điều kiện thanh toán: Nhà thầu tham dự đấu thầu các gói thầu nêu trên phải có cam kết tự ứng vốn trước hoặc có bảo lãnh tín dụng ngân hàng cung cấp đủ vốn thi công hoàn thành gói thầu theo đúng tiến độ. Chủ đầu tư sẽ thanh toán khối lượng hoàn thành theo kế hoạch vốn được phân bổ hằng năm  của cấp có thẩm quyền cho công trình.

5- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn.

6- Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

7- Loại hợp đồng: trọn gói.

8- Thời gian thực hiện hợp đồng: 
 - Gói thầu số 1 và số 2: 150 ngày cho mỗi gói thầu.
 - Gói thầu số 3: 90 ngày.

9- Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong tháng 8/2005.

	Chủ đầu tư (Ban Giải phóng mặt bằng và Xây dựng khu tái định cư các KCN) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu thầu công trình theo đúng các nội dung quy định nêu trên và các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu./.

                                                            KT- CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH      
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên  
- Lưu VP, K6. (TB.4) 

                                                                                   Nguyễn Văn Thiện