ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                              
Số: 2128/UBND - CN                     Quy Nhơn, ngày  24   tháng   8   năm  2005
V/v bàn giao các nội dung có liên quan của dự án đầu tư KCN Phú Tài mở rộng về phía Nam 	

                                     Kính gửi:  - Sở Tài chính;
                                                      - Ban Quản lý các khu công nghiệp;
                                                      - Công ty Phát triển hạ tầng các KCN;
                                                      - Ban GPMB và XD khu tái định cư các KCN;
                                                      - Công ty cổ phần Xây lắp Điện Tuy Phước.

Ngày 04/7/2005, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 1609/UBND-CN quy định trong tháng 7/2005 Công ty cổ phần Xây lắp Điện Tuy Phước phải  hoàn thành công tác quyết toán và bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Tài mở rộng về phía Nam và khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân cho Công ty Phát triển hạ tầng các KCN và Ban Giải phóng mặt bằng và Xây dựng khu tái định cư các KCN, tuy nhiên đến nay công việc nêu trên vẫn chưa hoàn thành. Lãnh đạo Công ty cổ phần Xây lắp Điện Tuy Phước phải nghiêm khắc kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về sự chậm trễ trong quá trình tổ chức thưc hiện bàn giao các nội dung công việc nêu trên, kể cả các quy định như đã nêu tại Công văn số 1609/UBND-CN ngày 04/7/2005. 

Để thực hiện nghiêm chủ trương bàn giao các dự án nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ:

1- Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần Xây lắp Điện Tuy Phước bàn giao toàn bộ các hồ sơ tài liệu có liên quan thuộc các phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, hồ sơ thuê đất của các doanh nghiệp và thiết kế- dự toán, hoàn công các hạng mục công trình đã hoàn thành cho Công ty Phát triển hạ tầng các KCN và Ban Giải phóng mặt bằng và Xây dựng khu tái định cư các KCN, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

2- Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn nội dung và quy định cụ thể thời gian để Công ty cổ phần Xây lắp Điện Tuy Phước hoàn thành hồ sơ quyết toán công trình trong thời hạn sớm nhất. Sau khi hồ sơ quyết toán hoàn thành, Sở Tài chính tiến hành thẩm tra số liệu, xác định chi phí đầu tư, công nợ, nguồn vốn và các khoản kinh phí khác có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện đầu tư dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt để làm cơ sở bàn giao, hạch toán quản lý tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.
3- Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các bên bàn giao, tiếp nhận phải phân công người trực tiếp theo dõi, giải quyết và đôn đốc việc thực hiện bàn giao để sớm hoàn thành công tác bàn giao các dự án nêu trên trong thời hạn sớm nhất.

Công ty cổ phần Xây lắp Điện Tuy Phước và các cơ quan có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./. 

                                                                                         KT-CHỦ TỊCH 
 Nơi nhận:                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- Như trên
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP Lê Nhuận;
- Lưu VP, K6, K7 (14).                                                                                                 

                                                                                     Nguyễn Văn Thiện