ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
	TỈNH BÌNH ĐỊNH 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
	____________	_____________________
	
Số:    79/TTr-UBND	  Quy Nhơn, ngày   22   tháng   8    năm 2005

TỜ TRÌNH
V/v tạm ứng vốn đợt II năm 2005 và báo cáo tiến độ thực hiện Dự án 
Cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
________________

Kính gửi: Bộ Tài chính 
	
	Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 23/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về phương án vốn đầu tư Dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội; 

	Căn cứ Công văn số 5032/TC/NSNN ngày 27/4/2005 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vốn Dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội;
		
	UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Tài chính về khối lượng thực hiện, tình hình thanh toán vốn đến nay và kế hoạch thực hiện còn lại của năm 2005 để làm cơ sở cho việc tiếp tục tạm ứng vốn năm 2005 đối với Dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội như sau: 

	1- Tổng mức đầu tư  đã điều chỉnh :  529,766 tỷ đồng. Trong đó :
	- Xây lắp 	: 	 428,557 tỷ đồng 
	- Chi phí khác 	:	   53,403 tỷ đồng 
	- Dự phòng 	:	   47,806 tỷ đồng 

	2- Khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/7/2005 : 341,451tỷ đồng. 
Trong đó : 
	- Xây lắp 	:	  295,000 tỷ đồng 
	- KTCB khác 	: 	    46,451 tỷ đồng 

	Giá trị khối lượng thực hiện qua các năm như sau : 
	+ Năm 2003: 83,461 tỷ đồng (xây lắp 50,21 tỷ đồng; chi phí khác 33,251 tỷ đồng) 
	+ Năm 2004: 150 tỷ đồng (xây lắp 138 tỷ đồng; chi phí khác 12 tỷ đồng) 
	+ Năm 2005 (tính đên31/7/2005): 107,79 tỷ đồng (xây lắp 106,59 tỷ đồng; chi phí khác 1,2 tỷ đồng).
	 
	Cụ thể các phần việc như sau: 
	- Phần xây lắp: 05 cầu Hà Thanh cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện lan can - tay vịn; Cầu vượt đầm Thị Nại hoàn thành 2 mố, khoan cọc nhồi 275/448 cọc, hoàn thành trụ 27/53 trụ, đúc dầm Super-T 165/343 dầm, lao lắp dầm Super-T 22/49 nhịp, đúc dầm hộp liên tục của 5 nhịp 315/500m; Đường dẫn hoàn thành nền đường, đang thi công móng cấp phối đá dăm; hoàn thành đường và các cầu công vụ phía Quy Nhơn.   
	- Chi phí khác bao gồm : Bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí rà phá bom mìn, thanh thải chướng ngại vật, bảo hiểm công trình, tư vấn lập dự án khả thi - thiết kế, một phần cho chi phí giám sát, chi phí Ban QLDA ….  

	3- Kinh phí đã tạm ứng cho dự án từ khởi công đến 31/7/2005: 278 tỷ đồng, cụ thể : 
	+ Năm 2003: 80 tỷ đồng , gồm Ngân sách Trung ương hỗ trợ 30 tỷ đồng và Bộ Tài chính tạm ứng 50 tỷ đồng 
	+ Năm 2004: 120 tỷ đồng , gồm Ngân sách Trung ương hỗ trợ 12 tỷ đồng và Bộ Tài chính tạm ứng 108 tỷ đồng 
	+ Quý II/ 2005: Bộ tài chính tạm ứng 78 tỷ đồng.

	4- Đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến nay : 278,00 tỷ đồng, bao gồm:
	- Xây lắp                                  : 236,588 tỷ đồng 
	- Chi phí khác                          :   41,412 tỷ đồng
	- Số còn nợ chưa thanh toán    :   63,451 tỷ đồng 
	
	5- Kế hoạch thực hiện trong  năm 2005:  200 tỷ đồng 
	Trong đó thực hiện Quý I/2005 là 49,20 tỷ đồng; Quý II/2005 và 1 tháng của Quý III/2005 là 58,79 tỷ đồng , kế hoạch 5 tháng cuối năm là 92,01 tỷ đồng. 
(có bảng phụ lục chi tiết kèm theo)
 
	6-  Kiến nghị: 
	Đề nghị Bộ Tài chính giải quyết kịp thời kinh phí tạm ứng theo kế hoạch năm 2005 và khối lượng thực hiện các năm trước với tổng số tiền là 433,461 tỷ đồng. Trước mắt, đề nghị Bộ Tài chính giải quyết vốn đợt này là: 106,461 tỷ đồng, trong đó :

	- Thanh toán khối lượng hoàn thành Quý II/2005 và tháng đầu Quý III/2005: 63,451 tỷ đồng 
	- Tạm ứng kinh phí để thực hiện hết Quý III/2005 : 43,010 tỷ đồng.

	Rất mong sự quan  tâm, chấp thuận của Bộ Tài chính ./.

                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                         CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Bộ trưởng Bộ Tài chính 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Vụ NS NN, Vụ ĐT Bộ TC
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Các Sở : TC, KHĐT, GTVT
- Lưu VP, K5, K14 (CT. 14b).                                            Vũ Hoàng Hà 
    ỦY BAN NHÂN DÂN	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
	TỈNH BÌNH ĐỊNH 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
	____________	_____________________

	KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẾN NGÀY 31/7/2005 	
DỰ ÁN: CẦU ĐƯỜNG QUY NHƠN - NHƠN HỘI
***
 (Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND  ngày     /8/2005 của UBND tỉnh Bình Định)

                                                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung được duyệt 	Kế quả thực hiện đến 31/7/
2005	Kế hoạch còn lại năm 2005	
				Tổng
số 	Quý III
(còn lại ) 	Quý
 IV	
I 	Kiến thiết cơ bản khác	53.403	46.451	4.300	2.400	1.900	
1	Đền bù GPMB 	25.142	25.140	-	-	-	
2	Chi phí khác 	28.261	21.311	4.300	2.400	1.900	
	- Lập dự án khả thi 	2.366	2.104	-	-	-	
	-  KS thiết kế KT, lập tổng dự toán 	11.200	9.231	1.500	1.000	500	
	- Rà phá bom mìn 	2.185	2.036	-	-	-	
	-  Dò tìm chướng ngại vật 	628	566	-	-	-	
	- Chi phí kiểm định công trình 	2.944	1.090	1.100	500	600	
	- Tư vấn giám sát 	932	634	300	200	100	
	- Chi phí Ban QLCT	1.788	1.100	400	200	200	
	- Bảo hiểm công trình 	3.509	3.500		-	-	
	- Các khoản chi khác và lệ phí	2.409	1.050	1.000	500	500	
II	Chi phí xây lắp 	428.557	295.000	87.710	40.610	47.100	
1	Xây dựng phần cầu 	369.701	250.000	80.000	35.900	44.100	
	- Cầu vượt đầm Thị Nại 	319.725	204.000	76.100	32.000	44.100	
	-  5 cầu Hà Thanh 	49.976	46.000	3.910	3.910	-	
2	Xây dựng đường dẫn vào các cầu 	39.767	35.030	4.700	4.700	-	
3	XD đường công vụ 	9.970	9.970	-	-	-	
4	Hệ tống điện chiếu sáng	9.119	-	3.000	-	3.000	
III 	Dự phòng 	47.806	-	-	-	-	
IV	TỔNG CỘNG	529.766	341.451	92.010	43.010	49.000