ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                            
Số:       02 /TTr-UBND                         Quy Nhơn, ngày   04   tháng   01  năm 2006

TỜ TRÌNH
V/v phương án vốn đầu tư mở rộng nút giao thông Đống Đa - Hoa Lư 
thuộc dự án Cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội  

Kính gửi: Bộ Tài chính 

	Dự án đầu tư mở rộng nút giao thông Đống Đa - Hoa Lư là điểm nối giữa dự án Cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội và dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài, tạo thành nút giao thông ngã năm cửa ngõ nội thành Quy Nhơn. Quy mô, kinh phí và phương án vốn đầu tư dự án như sau:

1- Quy mô đầu tư: 
Thiết kế chỉnh lý nút giao thông Đống Đa-Hoa Lư trên cơ sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, điều chỉnh một số vị trí phù hợp với hiện trạng giải phóng mặt bằng, cụ thể:

- Mở rộng nhánh Quy Nhơn - Nhơn Hội trong phạm vi nút giao thông theo quy mô hòan chỉnh 04 làn xe với Bn = 30m;
- Mở thêm 01 làn xe rẽ trái tại nút theo tiêu chuẩn kỹ thuật và xây dựng đảo xuyến tại trung tâm nút với bán kính R = 15m;
- Xây dựng tượng đài hoặc vườn hoa phạm vi dải đất tam giác Đống Đa - Hoa Lư tạo cảnh quan xanh, đẹp trong khu vực;
- Xây dựng hệ thống chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông.

2- Công tác GPMB:
Tổng số hộ cần giải tỏa 209 hộ, trong đó có 188 hộ bị giải tỏa trắng. Tổng kinh phí GPMB là 43.248 triệu đồng. 
    
3- Kinh phí đầu tư:		      
             Tổng số: 52.235.000.000 đồng. Trong đó: 
- Chi phí xây lắp:    8.987.000.000 đồng;
- Chi phí GPMB :  43.248.000.000 đồng.
                                          
	4- Tiến độ thực hiện: 
Hoàn thành công tác GPMB và đầu tư mở rộng nút giao thông đến tháng 06/2006 cùng với Dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội để phát huy hiệu quả phục vụ Khu Kinh tế Nhơn Hội.

5- Phương án vốn đầu tư:
Vì đây là điểm nối của dự án Cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội, do vậy đề nghị cho phép bổ sung và điều chỉnh vào trong dự án của Cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội với phương thức vốn đầu tư được thực hiện như cơ chế vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 23/10/2002, cụ thể như sau:

- Chi phí bồi thường GPMB do Trung ương hỗ trợ theo chương trình mục tiêu với số tiền 43.248 triệu đồng;
- Chi phí xây lắp 9.987 triêu đồng được ngân sách Trung ương ứng vốn thực hiện và được hoàn trả từ nguồn thu sử dụng đất tại khu kinh tế Nhơn Hội.

Trước mắt để đảm bảo thực hiện kịp thời công tác GPMB và thi công công trình trong năm 2006, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tài chính cho ngân sách tỉnh Bình Định tạm ứng bổ sung vốn từ ngân sách Trung ương hoặc cho tạm ứng từ vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước với số tiền 52.235 triệu đồng (năm mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu đồng).

Rất mong sự quan tâm, chấp thuận của Bộ Tài chính./. 

                                                                             TM UỶ BAN  NHÂN DÂN TỈNH
                                                                                       CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC Nguyễn Sinh Hùng;
- Vụ NSNN - Bộ Tài chính;
- Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính;
- Các Sở TC, KH&ĐT, GTVT;
- Lưu VT +  K7, K14 (CT. 10 b).

                                                                                Vũ Hoàng Hà