ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
	TỈNH BÌNH ĐỊNH 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
	____________	_____________________
	
     Số:   03/TTr-UBND	   Quy Nhơn, ngày   04  tháng   01  năm 2006

TỜ TRÌNH
V/v tạm ứng vốn năm 2006 để thực hiện Dự án Cầu đường 
Quy Nhơn - Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
Kính gửi: Bộ Tài chính 
	
	Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 23/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về phương án vốn đầu tư Dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội; 
	Căn cứ Công văn số 5032/TC/NSNN ngày 27/4/2005 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vốn Dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội;
		
	UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Tài chính về khối lượng thực hiện, tình hình thanh toán vốn đến nay và kế hoạch thực hiện còn lại của năm 2006 để làm cơ sở cho việc tiếp tục tạm ứng vốn năm 2006 đối với Dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội như sau: 

	1- Tổng mức đầu tư: 582,001 tỷ đồng (kể cả bổ sung, điều chỉnh).
	Trong đó: - Xây lắp          :  465,031 tỷ đồng;
                           - Chi phí khác  :  101,973 tỷ đồng;
                           - Dự phòng       :    14,997 tỷ đồng.
	
	1.1- Tổng dự toán đã được duyệt:  529,766 tỷ đồng. 
	Trong đó:	- Xây lắp 	          : 	 456,044 tỷ đồng; 
	                    - Chi phí khác 	:	   58,725 tỷ đồng; 
	                    - Dự phòng 	:	   14,997 tỷ đồng. 

	1.2- Bổ sung nút giao thông Đống Đa - Hoa Lư: 52,235 tỷ đồng. 
	Trong đó :   - Xây lắp                  :            8,987 tỷ đồng;
                              - Chi phí khác          :          43,248 tỷ đồng.	

	2- Khối lượng thực hiện đến 31/12/2005: 383,461tỷ đồng. 
	Trong đó:   - Xây lắp 	:          337,010 tỷ đồng; 
	                   - KTCB khác 	: 	   46,451 tỷ đồng. 

	2.1- Giá trị khối lượng thực hiện qua các năm như sau: 
	+ Năm 2003: 83,461 tỷ đồng (xây lắp 50,21 tỷ đồng; chi phí khác 33,251 tỷ đồng); 
	+ Năm 2004: 150 tỷ đồng (xây lắp 138 tỷ đồng; chi phí khác 12 tỷ đồng); 
	+ Năm 2005: 150 tỷ đồng (xây lắp 148,8 tỷ đồng; chi phí khác 1,2 tỷ đồng).	 
	2.2- Cụ thể các phần việc như sau: 
	- Phần xây lắp: hoàn thành 05 cầu Hà Thanh, nền - móng đường dẫn phía Quy Nhơn và Nhơn Hội; cơ bản hoàn thành 05 nhịp dầm hộp liên tục cầu vượt đầm Thị Nại dài 501m (gói thầu số 14) ; hoàn thành 30/49 nhịp cầu dẫn dầm Super-T cầu vượt đầm Thị Nại và các hạng mục phụ trợ khác.   
	- Chi phí khác bao gồm: Bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí rà phá bom mìn, thanh thải chướng ngại vật, bảo hiểm công trình, tư vấn lập dự án khả thi - thiết kế, một phần cho chi phí giám sát, chi phí Ban QLDA; ….  

	3- Kinh phí đã được hỗ trợ và tạm ứng đến ngày 31/12/2005 là 341 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 42 tỷ đồng và Bộ Tài chính tạm ứng 299 tỷ đồng, cụ thể: 
	+ Năm 2003: 80 tỷ đồng, gồm Ngân sách Trung ương hỗ trợ 30 tỷ đồng và Bộ Tài chính tạm ứng 50 tỷ đồng 
	+ Năm 2004: 120 tỷ đồng, gồm Ngân sách Trung ương hỗ trợ 12 tỷ đồng và Bộ Tài chính tạm ứng 108 tỷ đồng 
	+ Năm 2005: Bộ tài chính tạm ứng 141 tỷ đồng.

	4- Đã thanh toán khối lượng hoàn thành: 341 tỷ đồng, bao gồm:
	- Xây lắp                                  : 299,588 tỷ đồng 
	- Chi phí khác                          :   41,412 tỷ đồng
	- Số còn nợ chưa thanh toán    :   42,461 tỷ đồng 
	
	5- Kế hoạch thực hiện trong  năm 2006:  198,54 tỷ đồng.
	Trong đó:   - Xây lắp         : 134,018 tỷ đồng
                             - Chi phí khác :   55,522 tỷ đồng
(có bảng phụ lục chi tiết kèm theo)
 
	6-  Kiến nghị: 
	Đề nghị Bộ Tài chính giải quyết kịp thời kinh phí tạm ứng theo kế hoạch năm 2006 và khối lượng thực hiện các năm trước chưa được thanh toán với tổng số tiền là 241 tỷ đồng. Trước mắt, đề nghị Bộ Tài chính giải quyết vốn đợt này là: 91 tỷ đồng, trong đó:
	- Thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối năm 2005 là 42 tỷ đồng; 
	- Tạm ứng kinh phí để thực hiện trong Quý 1/2006 là 49 tỷ đồng.

	Rất mong sự quan  tâm, chấp thuận của Bộ Tài chính ./.

                                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH                                                         
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Bộ trưởng Bộ Tài chính 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Vụ NS NN, Vụ ĐT Bộ TC
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Các Sở : TC, KHĐT, GTVT
- Lưu VP, K7, K14 (CT. 14b).