ỦY BAN NHÂN DÂN		        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH  			             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1395 /UBND-TC         		         Quy Nhơn, ngày  09  tháng  6  năm 2005
V/v thực  hiện  Chỉ thị số 08/
2005/CT-UB ngày11/3/2005
của UBND tỉnh.

			         Kính gửi :    - Sở Tài chính
					        - Kho bạc Nhà nước tỉnh
					        - Các Chủ đầu tư, Ban QLDA đầu tư xây dựng	

Ngày 11/3/2005, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/2005/CT-UB để  chấn chỉnh công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý. Qua thời gian thực hiện, trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh, một số chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chưa theo dõi sát tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nên lúng túng trong việc phân bổ vốn; việc phối hợp giữa Kho bạc Nhà nước tỉnh với các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, chưa tháo gỡ kịp thời các vướng mắc dẫn đến thời gian thanh toán vốn đầu tư bị chậm trễ. Để bảo đảm việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng đúng quy định, kịp thời, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình, đồng thời phát huy quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/2005/CT-UB như sau:

1- Trong quá trình thanh toán vốn đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ thanh toán vốn đối với những dự án, công trình khi có kế hoạch thanh toán vốn đầu tư của Sở Tài chính thông báo.

2- Về quy trình thanh toán vốn đầu tư: Theo Chỉ thị 08/2005/CT-UB, để việc thanh toán vốn sát với tình hình thực hiện của các dự án, công trình, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phân bổ vốn cho từng hạng mục, công trình. Để khắc phục tình trạng chưa sát khối lượng thực hiện của từng dự án và sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ đầu tư, UBND tỉnh chỉ đạo việc thanh toán vốn đầu tư như sau:

- Hàng quý, trước ngày 15 của tháng đầu quý, các Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập kế hoạch thanh toán vốn đầu tư xây dựng quý cho các dự án, công trình do đơn vị mình quản lý theo thứ tự ưu tiên để làm cơ sở thanh toán vốn đầu tư xây dựng; giao Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn việc lập kế hoạch thanh toán vốn đầu tư xây dựng hàng quý. Kế hoạch thanh toán vốn đầu tư xây dựng hàng quý được gửi cho Kho bạc Nhà nước tỉnh và Sở Tài chính.
- Căn cứ mức vốn chi đầu tư do Sở Tài chính thông báo và trên cơ sở kế hoạch thanh toán vốn đầu tư xây dựng của chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiến hành thanh toán vốn theo quy định. Hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng của Kho bạc Nhà nước tỉnh phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch. 
 
Những nội dung khác của Chỉ thị số 08/2005/CT-UB ngày 11/3/2005 của UBND tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các cơ quan chức năng liên quan phối hợp thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, phản ánh kịp thời cho UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết./.

				         	               CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  
Nơi nhận:
- Như trên							
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Lãnh đạo VP, CV
- Lưu VP, K7

                                                                            Vũ Hoàng Hà