ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        ĐT. 7
Số: 1086 /UB - TH                          Quy Nhơn, ngày 10  tháng   5  năm  2005
V/v điều chỉnh tiến độ thi công đường dẫn và 5 cầu Hà Thanh thuộc dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội	

                                                           Kính gửi:   Sở Giao thông Vận tải 

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về điều chỉnh tiến độ thi công hạng mục đường dẫn và 5 cầu Hà Thanh thuộc dự án cầu đường Quy Nhơn -Nhơn Hội, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:                                                       
Cho phép điều chỉnh tiến độ thi công các gói thầu đường dẫn và 5 cầu Hà Thanh thuộc Dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội đến 30/8/2005; Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông ký hợp đồng điều chỉnh với các nhà thầu và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình đúng thời gian nêu trên để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2005).
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tổ chức triển khai thực hiện./.

                               KT. CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Nơi nhận                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
- Như trên
- CT, PCT UBND tỉnh Trịnh Hồng Anh 
- Đ/c Phạm Bá
- BQL DA GT 
- CVP UBND tỉnh 
- Lưu VP, K3                                                                            

                                                                                           Trịnh Hồng Anh