ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        ĐT. 13
Số:  485  /UB - TH                      Quy Nhơn, ngày  28   tháng   02  năm  2005
V/v chấm dứt Hợp đồng xây lắp với nhà thầu thi công Gói thầu số 8 - Cầu  Hà Thanh 4, thuộc Dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội	
                                                                                                       
                                                       Kính gửi:   -    Sở Giao thông Vận tải 
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Xét Tờ trình số 175/TT-GTVT ngày 22/02/2005 của Sở Giao thông Vận tải về việc cắt hợp đồng xây lắp gói thầu số 8 - Cầu Hà Thanh 4 thuộc Dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội do Công ty Xây dựng 79 thi công vì không đảm bảo năng lực về tài chính, vật tư, nhân lực để thi công hoàn thành công trình theo tiến độ kế hoạch. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:                                                          
1- Đồng ý chấm dứt Hợp đồng xây lắp đối với Công ty Xây dựng 79 là nhà thầu thi công gói thầu số 8 - Cầu Hà Thanh 4 thuộc Dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội để giao cho Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Đinh Phát và Công ty TNHH Tùng Hưng tiếp tục thi công khối lượng còn lại theo đơn giá trúng thầu của gói thầu số 8 đã được duyệt nhằm đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ kế hoạch.

2- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông thanh lý Hợp đồng xây lắp với Công ty Xây dựng 79 và tiến hành thương thảo, ký hợp đồng với Liên danh Công ty TNHH Đinh Phát và Công ty TNHH Tùng Hưng để tiếp tục thi công khối lượng còn lại của gói thầu số 8 nêu trên theo đúng quy định hiện hành. 

Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
                                          
                                          CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Nơi nhận                                                                               
- Như trên
- CT, PCT UBND tỉnh Trịnh Hồng Anh 
- Đ/c Phạm Bá
- BQL DA GT
- Công ty XD 79
- Công ty TNHH Tùng Hưng, Đinh Phát 
- CVP UBND tỉnh  
- Lưu VP, K3                                                                                   
                                                                                
                                                                                               Vũ Hoàng Hà