ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        ĐT. 12
Số: 945 /UB - TH                            Quy Nhơn, ngày 25  tháng  4  năm  2005
V/v bổ sung khối lượng và thay đổi kết cấu mái đường dẫn và 5 cầu Hà Thanh thuộc Dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội

                                   Kính gửi:    -    Sở Kế hoạch và Đầu tư 
-	Sở Giao thông Vận tải 

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 435/GTVT-GT ngày 20/4/2005 về việc bổ sung khối lượng, thay đổi kết cấu mái đường dẫn và 5 cầu Hà Thanh, công trình cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:                                                      
1- Cho phép điều chỉnh kết cấu gia cố mái đường dẫn và 5 cầu Hà Thanh thuộc Dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội từ mái đá chẻ dày 25 cm, vữa xi măng mác 100 trên lớp đệm đá dăm dày 10 cm sang kết cấu lát mái bằng tấm bê tông xi măng mác 200 đá 1*2, kích thước 50*50*7 cm trên lớp đệm đá dăm dày 10 cm, vữa láng dày 3 cm. Lưu ý việc điều chỉnh kết cấu gia cố mái nêu trên không được tăng giá trị các gói thầu và phải đảm bảo kỹ, mỹ thuật công trình. 
2- Đồng ý bổ sung khối lượng đắp đất và nền đường công vụ trên toàn bộ diện tích trống nằm giữa đường dẫn và đường công vụ với cao trình đắp đất bằng đường công vụ để mở rộng đường dẫn vào cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội. Nguồn kinh phí bổ sung cân đối trong Dự án.
 Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ban Quản lý dự án giao thông tiến hành lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc trên vào dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng./.                                
                                         
                                           CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Nơi nhận                                                                              
- Như trên
- CT, PCT UBND tỉnh Trịnh Hồng Anh
- CVP UBND tỉnh  
- Lưu VP, K3                                                                            

                                                                                      
                                                                                               Vũ Hoàng Hà