ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                                          ĐT. 9
Số: 1085/QĐ-CT UB                            Quy Nhơn, ngày 05 tháng  5  năm  2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp
Công trình: Đường Gò Găng – Cát Tiến
Lý trình: Km 0- Km 5+ 500

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

	- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
	- Căn cứ Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;
	- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 113/TTTĐ-KHĐT ngày 28/4/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Đường Gò Găng – Cát Tiến (Lý trình km 0+000 - Km 5+500) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp của công trình được phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-CTUB ngày 21/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh được phân chia thành 9 gói thầu, trong đó có 6 gói thầu đường và 3 gói thầu cầu, cụ thể:

- Gói số 1: Đoạn từ Km 0+00 – Km 0 +500 (cả nút giao thông)
- Gói số 2: Đoạn từ Km 0+500 – Km 1+517
- Gói số 3: Đoạn từ Km 1+877 – Km 2+500
- Gói số 4: Đoạn từ Km 2+500 – Km 3+379
- Gói số 5: Đoạn từ Km 3+671,8 – Km 4+500
- Gói số 6: Đoạn từ Km 4+500 – Km 5+500
- Gói số 7: Cầu hộp tại Km 0+986,7
- Gói số 8: Cầu Bờ Kịnh tại Km 1+641
- Gói số 9: Cầu Lồ Ồ tại Km 3+515,1
2- Giá các gói thầu: 41.072.416.000 đồng, gồm:
- Gói số 1: 2.024.767.000 đồng
- Gói số 2: 5.399.740.000 đồng
- Gói số 3: 3.844.296.000 đồng
- Gói số 4:   5.836.570.000 đồng
- Gói số 5:   2.686.778.000 đồng
- Gói số 6:   3.007.716.000 đồng
- Gói số 7:   2.048.578.000 đồng
- Gói số 8: 12.446.053.000 đồng
- Gói số 9:   3.777.918.000 đồng
3-  Nguồn tài chính và điều kiện tài chính: 
- Nguồn tài chính: Vốn ngân sách
- Điều kiện tài chính: Giá dự thầu của hồ sơ dự thầu phải giảm tối thiểu 6% đối với các gói thầu cầu (từ gói số 7 đến gói số 9), giảm 8% đối với các gói thầu đường (từ gói số 1 đến gói số 6) so giá gói thầu nêu trên mới được xem xét, đánh giá chi tiết.
4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
5. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.
6. Loại hợp đồng: 
- Gói thầu số 8: Hợp đồng có điều chỉnh giá
- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (riêng gói thầu số 8 thời gian thực hiện là 15 tháng).
8. Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong tháng 5/2005.

Điều 2: Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu nêu tại điều 1 Quyết định này theo đúng Quy chế đấu thầu.

	Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 3539/QĐ-CTUB ngày 16/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.                                                                  
                                                                           
                                                                        KT- CHỦ TỊCH  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Chủ tịch UBND tỉnh 
- Lưu VP, K3                                                                

                                                                                                
                                                                                              Trịnh Hồng Anh