ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                                        ĐT. 9
Số: 663 /QĐ-CTUB                              Quy Nhơn, ngày 7  tháng  3  năm  2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp
Công trình: Đường Bắc Nam
Địa điểm xây dựng: Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

	- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
	- Căn cứ Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;
	- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 56/TTTĐ-KHĐT ngày 11/3/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Đường Bắc Nam, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát với những nội dung chủ yếu sau:

1- Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp của hạng mục công trình được phê duyệt tại Quyết định số 3392/QĐ-CTUB ngày 02/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh được phân chia thành 5 (năm) gói thầu, cụ thể:

- Gói số 1: Đoạn nút ngã 6
- Gói số 2: Đoạn từ ngã 6 đến đường Nguyễn Chí Thanh
- Gói số 3: Đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến ĐT 635
- Gói số 4: Đoạn từ đường ĐT 635 đến ngã tư Phong An
- Gói số 5: Đoạn từ ngã tư Phong An đến đường 3/2

2- Giá gói thầu: 

- Gói số 1:    915.465.000 đ
- Gói số 2: 1.838.442.000 đ
- Gói số 3: 2.123.926.000 đ
- Gói số 4: 1.058.317.000 đ
- Gói số 5: 1.159.288.000 đ

3-  Nguồn tài chính và điều kiện tài chính: 
- Nguồn tài chính: Vốn ngân sách huyện Phù Cát (từ nguồn thu quyền sử dụng đất quy hoạch mở rộng giao thông thị trấn Ngô Mây).
- Điều kiện tài chính: Giá dự thầu của hồ sơ dự thầu phải giảm tối thiểu 3% đối với giá gói thầu mới được xem xét đánh giá chi tiết.

4- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trên cơ sở sơ tuyển nhà thầu đủ điều kiện về tài chính và năng lực thi công).

5- Phương thức đấu thầu: Mỗi gói thầu là một túi hồ sơ.

6- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho từng gói thầu.

7- Thời gian thực hiện hợp đồng: 

- Gói số 1:    120 ngày
- Gói số 2:    180 ngày
- Gói số 3:    180 ngày
- Gói số 4:    140 ngày
- Gói số 5:    140 ngày

8- Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong tháng 3/2005.

Điều 2: UBND huyện Phù Cát chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu gói thầu nêu tại điều 1 Quyết định này theo đúng Quy chế đấu thầu.
	
Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.                                                                  
                                                                           
                                                                      KT- CHỦ TỊCH UBND  TỈNH BÌNH ĐỊNH 
                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Chủ tịch UBND tỉnh 
- Lưu VP, K3                                                                

                                                                                             
                                                                                         Trịnh Hồng Anh